2016년 시민공약평가단 운영 결과(시장공약사항 조정 내역)

� 회의안건 : 총 22건(승인 19건, 미승인 3건)

공 약 명 (주관부서)	조정 사항		조정 사유	조정 결과
	당 초	변 경
① 대한민국 창조경제특별시 추진 (정책기획관)	○사업내용 - 대구창조경제협의회 구성 및 운영 - 제도적 기반 마련 - 공공기관․연구소 유치 (공공기관 유치대상 : 3개)	○ 사업내용 - 대구창조경제협의회 구성 및 운영 - 제도적 기반 마련 - 공공기관․연구소 유치 (공공기관 유치대상 : 2개) - 창조도시포럼운영(5-4-1-가)추가	○ 기존 추진중인 지표에 ‘창조도시 포럼운영’(관리번호 5-4-1-가)을 추가 ○ 공공기관․연구소 유치 대상 중 ‘국토관측위성정보활용기술센터’는 국토부의 방침(위성정보수신안테나 미설치 및 기존시설이용)에 따라 현재, 사실상 유치가 어려워 제외 필요	승인
② 주력산업 고도화 발전거점(서북권) (기계자동차과)	○ 연차별 추진계획 - 융·복합 R&D 과제 ․ 사업내용 : 코크스기반 고순도 흑연가공 과제 수행 ○ 연차별 투자계획 - 사업비 : 35,600백만원	○ 연차별 추진계획 - 융·복합 R&D 과제 ․ 사업내용 : (삭제) ○ 연차별 투자계획 - 사업비 : 18,500백만원 ※ 탄소산업 클러스터 조성사업 (‘15.4월 예타대상사업으로 선정)	○ 연차별 추진계획 - 융·복합 R&D 과제 삭제 ․ 확인지표인 ‘코크스기반 고순도 흑연 가공과제 수행’ 삭제 : ‘15년 4월 예타 대상사업으로 선정된 탄소산업 클러 스터 조성사업과 과제가 중복되어 주무부처(산업부) 사업선정에서 제외되어 추진 불가 ○ 연차별 투자계획 : 사업제외로 사업비 조정	승인
③ 도시형복합산업 발전거점(서북도심권) (섬유패션과)	○연차별 추진계획 - 산업용섬유개발 거점 · 첨단 하이브리드 사업 · 슈퍼섬유 수요연계 비즈니스사업 - 안경특화지구 조성 · 사업기간 : ‘14~’18년 · 사업비 : 440억원	○연차별 추진계획 - 산업용섬유개발거점(삭제) - 안경특화지구 조성 · 사업기간 : ‘14~’19년 · 사업비 : 300억원	○ 산업용섬유개발 거점 목표 변경 - 첨단 하이브리드섬유 사업화 예타 탈락 - 슈퍼섬유 수요연계 비즈니스 강화사업이 주관기관 변경으로 사업 취소, 예산 삭감 ○ 안경산업토탈비즈니스센터 중심 안경특화 지구 조성(사업기간 및 사업비 변경)	승인

공 약 명 (주관부서)	조정 사항		조정 사유	조정 결과
	당 초	변 경
③ 도시형복합산업 발전거점(서북도심권) (기계자동차과)	○연차별 추진계획 (뿌리산업특화단지 조성) - ‘16 : 부지매입 - ‘17 : 실시설계 - ‘18 : 착공 (첨단공구산업 기술고도화) - ‘15 : 예타통과·부지매입 - ‘16 : 센터설계 (첨단공구산업) - 사업비 : 54,563백만원 (국 32,467, 시 15,856, 민자 6,240) (로봇산업클러스터 조성) - 사업비 : 232,800백만원 (국 162,100, 시 45,400, 민자 25,300)	○연차별 추진계획 (뿌리산업특화단지 조성) - ‘16 : 전수조사 - ‘17 : 부지매입 - ‘18 : 실시설계 (첨단공구산업 기술고도화) - ‘15 : 예타통과 - ‘16 : 부지매입·센터설계 (첨단공구산업) - 사업비 : 63,540백만원 (국 32,467, 시 15,856, 민자 15,217) (로봇산업클러스터 조성) - 사업비 : 141,595백만원 (국 88,952, 시 36,369, 민자 16,274)	○ ‘뿌리산업특화단지 조성’ - 목표 변경 : 3공단내 도금특화단지 조성을 위해 공단내 부지매입을 추진 하고 있으나, 최적지 물색이 어려워 부지 매입 지연, ’16년 전수조사 재조사를 통한 부지 선정 진행 중 ○ 첨단공구산업 기술고도화사업 추진 - 추진일정 변경 : ’15. 8월 예타통과 후 차년도에 사업비 확보하여 2016년에 1차년도 사업추진 ○ 첨단공구산업 - 연차별 투자계획 변경 : 국비사업의 민자 매칭비율 변경에 따른 민자증액 으로 총사업비 증액 ○ 로봇산업클러스터 조성사업 - 연차별 투자계획 변경 : 예타 당시 사업비는 2,328억원➩5차년도(2016년도) 최종 연차협약 결과 총사업비 1,415억원 으로 확정	승인
④ 첨단융합제조업 발전거점(서남권) (첨단산업과)	〈물산업클러스트 조성〉 ○ 연차별 추진계획 - 사업기간 : ’15 ~ ’17년 - 사업비 : 3,519억원(국비2,961, 시비 558) ○ 기초‧원천 R&D지원기관 고자기장 센터 설립 〈테크비즈센터 건립〉 ○ 연차별 추진계획 - ’17년 준공 및 입주 〈초임계 CO2 발전 시스템 구축〉 ○ 연차별 추진계획 - 사업기간 : ’16 ~ ’21년 - 사업비 : 1,860억원(국비876, 민자984)	〈물산업클러스트 조성〉 ○ 연차별 추진계획 - 사업기간 : ’15 ~ ’18년 - 사업비 : 2,950억원(국비2,335, 시비 615) ○ 기초‧원천 R&D지원기관 고자기장 센터 확인지표 삭제 - 미래부 정책방향 변경으로 현재 센터 설립 계획이 없어 설립 불확실 〈테크비즈센터 건립〉 ○ 연차별 추진계획 - ’17 ~ ’18년 공사시행 및 준공 〈초임계 CO2 발전 시스템 구축〉 ○ 연차별 추진계획 - 사업기간 : ’17 ~ ’22년 - 사업비 : 1,862억원(국비877, 민자985)	○ 물산업클러스터 조성 - 사업기간 및 사업비 변경 ○ 기초‧원천 R&D지원기관 고자기장센터 설립 - 미래부 정책방향 변경(고자기장연구R&D 사업화)으로 현재 센터설립 계획이 없어 사업 제외 ○ 테크비즈센터 건립 - 건립부지 변경에 따른 각종 행정절차 이행 으로 연차별추진계획 변경 ○ 초임계 CO2 발전 시스템 구축 - 사업기간 및 사업비 변경	승인

공 약 명 (주관부서)	조정 사항		조정 사유	조정 결과
	당 초	변 경
⑤ SW융합산업 클러스터 조성 (스마트시티추진단)	○ SW기업 집적단지 조성 - 사업비(민간) : 2,723억원 - 사업내용 ․ 대경ICT협동조합을 통한 협동화단지 형태로 개발 ․ ‘15. 7월 : 도시공사산업용지 선수 분양 ․ ‘16. 7월 : 산업용지 입주 개시	○ SW기업 집적단지 조성 - 사업비 : 1,041억원 - 사업내용 ․ 대경ICT협동조합 또는 공개분양을 통한 단지 조성 ․ ‘17년 하반기 : 도시공사 산업 용지 선수 분양 ․ ‘18년하반기 : 산업용지 입주 개시	○ 당초 민간사업비 2,723억원에는 부지 분양비 1,041억원, 건축비1,682억원이 포함되어 있으나, 산업용지 분양이 다소 지연 (당초‘15년까지)됨에 따라, ‘16.9월 현재 대상 부지 98,410㎡(B8,B10제외) 중 20.9%인 20,616㎡가 분양 완료되어 218억 정도의 민간사업비 투자 (’16년말 까지 44.4% 분양 예정) ○ 당초 계획대로 분양이 완료되지 않았고, ‘17년까지 단지 조성공사 준공 및 입주가 곤란한 실정임 ‘17년까지 투자가 어려운 건축비 1,682억원을 제외한 부지분양비 1,041억원을 공약사항에 반영	승인
⑥ 청년 맞춤형 고용 활성화 (고용노동과)	○추진목표 - ’16년 : 250명 - ’17년 : 250명 - ’18년 : 250명	○추진목표 - ’16년 : 150명 - ’17년 : 150명 - ’18년 : 150명 ※‘16년부터 근로자에 대한 취업 장려금 지원 신설 : 정규직 전환 후 6개월 재직시 100만원 직접지원	○ ‘15.7 정부 “청년고용절벽 해소 종합대책” 발표시 정부‧지자체 청년인턴사업 단계적 통합관리 추진 및 정부 청년인턴 확대 추진 ○ 고용노동부의 대구지역 청년인턴 인원(약 2,500명 수준)과 정부 정책 방향을 고려, 기업인턴 인원은 축소하고 인턴의 장기재직을 유도하는 취업장려금 (인턴에 직접지원)을 확대하는 방향으로 개편	미승인
⑦ 서민상권 활성화 (경제정책과)	〈스타가게 선정 육성〉 ○연차별 추진계획 - ’15년 ~ ’18년 : 매년 50개사 (총 200여개) 〈공동물류센터 건립〉 - ‘16년 : 계획수립 - ‘17년 : 부지매입 및 실시설계 - ‘18년 : 착공 및 건립	〈스타가게 선정 육성〉 ○연차별 추진계획 - ’16년 ~ ‘18년 : 매년 10개사 (총 40여개) 〈공동물류센터 건립〉 - ’17년 : 계획수립 - ‘18년 : 부지매입 및 실시설계 - ‘19년 : 착공 및 건립	○ 스타가게 선정 육성 - 선정의 최소화를 통해 스타가게 희소성 및 자긍심 고취 · 당초 매년50개 →10개 정도로 축소 ○ 공동물류센터 건립 - ‘16년 대구시 지특예산 한도초과로 예산 미반영	승인

공 약 명 (주관부서)	조정 사항		조정 사유	조정 결과
	당 초	변 경
⑧ 택시사업 활성화 지원 (택시물류과)	○ 연차별 추진계획 - 택시감차 ․ ’14년 : 감차위원회 구성 ․ ’15년 : 감차 320대 - 카드결제기 ․ ‘17년 : 결제기 운용 ․ ‘18년 : 결제기 운용 - 쉼터 설치 ․ ‘15년 : 1개소 ○ 연차별 투자계획 - 카드결제기 설치 ․ ‘17년～’18년 : - - 쉼터 설치 ․ ‘17년 : 300백만원	○ 연차별 추진계획 - 택시감차 ․ ’15년 : 감차위원회 구성 ․ ’16년 : 감차320대 - 카드결제기 ․ ‘17년 : 6,500대(누계) ․ ‘18년 : 10,000대(누계) - 쉼터 설치 ․ ‘15년 : 6개소 ○ 연차별 투자계획 - 카드결제기 설치 ․ ‘17년 : 975백만원 ․ ‘18년 : 1,200백만원 - 쉼터 설치 ․ ‘17년 : -	○ 택시감차 - 위원회 구성 후 연도별 감차계획 결정 ․ ’16년 : 감차 320대 ․ ’17년 : 감차 510대 ․ ’18년 : 감차 510대 ○ 카듣결제기 - 택시 카드결제기는 여신전문금융법 개정(‘15.7.20)에 따라 2018년 7월까지 단말기 전면 교체(MS→IC)할 계획 이므로 연차별 추진계획 및 투자계획 변경	승인
⑨ 경상감영 복원 및 달성토성 정비 나. 달성토성 정비 (문화예술정책과)	○연차별 추진계획 - ’16년 : 시행협의 - ’17년 : 시행계획 수립 - ’18년 : 실시설계	○연차별 추진계획 - ’17년 : 시행협의 - ’18년 : 시행협의	○ 달성역사공원사업(문체부)은 동물원 이전계획 확정 후 추진을 전제 - 동물원 이전계획 미확정으로 인한 사업추진 애로 ※ 수성구, 달성군 이견 ○ 동물원이전 확정 후 발굴 및 사적 보수정비사업(문화재청)으로 추진	승인
⑩ 화원유원지 역사공원 조성 (관광과)	○연차별 추진계획 - ’14년 : 기본구상 - ’15년 : 기본계획 수립 - ’16년 : 실시설계 및 행정절차 추진 - ’17년 : 공사착공 - ’18년 : 공사준공 및 운영	○연차별 추진계획 - ’16년 : 기본계획 수립 - ’17년 : 실시설계 및 행정절차 추진 - ’18～‘19년 : 공사착공 및 공사 - ’20년 : 공사준공 및 운영	○ 문체부 3대문화권 사업으로 추진, 중앙부처 협의로 국비 교부 지연 - 총사업비 관리대상 협의(기재부’16. 6월), 지방재정 중앙투자심사(행자부, ’16. 10월) ○ 복합 전시관 건립 등 사업규모 증가에 따른 설계 및 공사기간 부족 - 설계 및 인허가 : 1년 소요 - 공사기간 : 2년 6개월 이상 소요	승인

공 약 명 (주관부서)	조정 사항		조정 사유	조정 결과
	당 초	변 경
⑪ 스포츠산업 육성 (체육진흥과)	○정책개요 - 사업비 : 175억원 (국비 19, 시비 156) - 스포츠체험관광 관련내용 포함 ○연차별 추진계획(임기내 목표) - 명품육상대회 육성(’17년) : 3개 - 스포츠체험관광(’16~‘18년) : 시행 ○연차별 투자계획 - ‘16년 : 3,774백만원 - ‘17년 : 4,170백만원 - ‘18년 : 2,520백만원	○정책개요 - 사업비 : 167억원 (국비 10, 시비 157) - 스포츠체험관광 관련내용 삭제 ○연차별 추진계획(임기내 목표) - 명품육상대회 육성(’17년) : 5개 - 스포츠체험관광(’16~‘18년) : 미시행 ○연차별 투자계획 - ‘16년 : 3,773백만원 - ‘17년 : 4,623백만원 - ‘18년 : 2,525백만원	○ 연차별 추진계획(목표 변경) - 명품육상대회 육성(3개→5개) ․2017세계마스터즈실내육상대회 및 꿈나무육상대회 추가 - 스포츠체험관광 삭제 ․ '16년 예산 삭감에 따른 스포츠 체험관광 미시행 ○ 연차별 투자계획 변경 - 스포츠체험관광 사업비 감액 - '17년 꿈나무육상대회 예산 증액 - 2017WMA대회 국비 미확보로 감액	승인
⑫ 시민운동장 도심복합 스포츠타운 조성 (체육진흥과)	○정책개요 - 사업비 : 414억원 (국비 121, 시비 293) ○연차별 추진계획(임기내 목표) - 다목적문화체육센터 건립	○정책개요 - 사업비 : 546억원 (국비 156, 시비 390) ○연차별 추진계획(임기내 목표) - 다목적문화체육센터 건립시기 연기(확인지표 삭제) * 시장님 지시사항(16.6월)	○ 체육회관 신축(수성구 대흥동)에 따른 예산 절감을 위해 사업시기를 2019년 으로 연기(기존체육회관을 다목적 문화체육센터로 활용할 계획) ○ 시민운동장 주경기장 리모델링 사업 범위 조정에 따른 사업비 증액 - 기존 관람석 존치 면적 축소 (4,500㎡→388㎡) - 기존 잔디, 전광판, 조명탑 및 기계․전기 장비 교체 - 인근 지역 소음 확산 최소화를 위한 관람석 지붕 4면 설치 등	승인
⑬ 사회서비스품질관리 전담기구 유치․운영 (복지정책관)	○사업개요 - 위치/규모 : 혁신도시 내/미정 - 내용 : 전담기구 유치 및 운영 - 사업기간 : ‘15년 ～ ’18년	○ 공약 폐기	○ 관련법안 대표발의자(정몽준 의원) 의원직 사퇴 및 제19대 국회 만료에 따라 법안 자동폐기 ○ 국회와 소관부서(보건복지부)에서의 관련 법안 제정여부가 불투명하므로 추진 불가	승인

공 약 명 (주관부서)	조정 사항		조정 사유		조정 결과
	당 초	변 경
⑭ 여성안심토탈 주거복지단지 시범사업 추진 (건축주택과)	❍ 정책개요 - 사업내용 : 어린이집, 스마트 워크센터, 경로당 등을 갖춘 여성안심토탈복지주거단지 조성 - 사업기간 : 2015～2018년 - 사업비 : 20억원 - 추진일정 ․ ’15년 : 계획검토 ․ ’16년 : 계획수립 및 시범단지 선정 ․ ’17년 : 사업추진 ․ ’18년 : 평가	❍ 공약 폐기		○ 당초 공약은 여성전용 주거(공공임대주택)‧사무 (스마트워크센터)‧복지(육아-어린이집, 돌봄-경로당) 공간을 갖춘 복합시설로 설치하는 계획으로 사업비 는 20억원이나, 공약과 같이 주거‧사무‧복지공간을 복합시설로 건립하려면 초기투자비(건축비)만 150억 ～300억원정도 소요되고 준공 후 유지관리비도 투입 되어야함 ○ 여성전용 주거‧업무‧복지공간을 갖춘 시설의 설치 국내사례가 없고, 여성전용스마트워크 센터 입주수요‧재정현황 등을 감안할 때 국비 지원 없이 한계가 있다고 판단되어 공약에서 제외함		승인
⑮ 청소년 수련시설 확충 (교육청소년정책관)	○ 연차별 추진계획 - ‘15년 : 부지 확정 - ‘16년 : 부지 매입 - ‘17년 : 설계용역 착공, 행정절차 이행 등 - ‘18년 : 준공(2), 착공(2) ․준공2개소(시립문화의집,강동 문화의집) ․착공2개소(수성구문화의집, 부지물색후선정)	○ 연차별 추진계획 - ‘15년 : 부지 확정 - ‘16년 : 부지 매입 - ‘17년 : 설계용역 착공, 행정절차 이행 등 - ‘18년 : 준공(1), 착공(3) ․준공1개소(시립문화의집) ․착공3개소(강동문화의집, 수성구문화의집,부지물색후선정		○ 강동 문화의집 건립을 위한 설계공모, 실시 설계용역 및 각종 공공건축물 인증을 위한 필수기한 소요로 준공기한을 2018년말로 조정		미승인
⑯ K-2 및 군사시설 이전 후적지 개발계획 수립 (군공항이전과)	○ 공약명 :K-2 및 군사시설 이전 후적지 개발계획 수립 ○ 연차별 추진계획 (K-2이전) - ‘14～’15년 : 이전건의 - ‘16～’17년 : 이전협의 및 후보지 선정 - ’18 : 이전작업 착수 (캠프워커 반환) - ‘14년 : 부지 매입 - ‘15～’18년 : 부지인수 및 도로․ 공원 등 조성	○ 공약명 : 대구공항 통합이전, 캠프워커 부지 반환 및 후적지 개발 ○ 연차별 추진계획 (K-2이전) - ‘14～’15년 : 이전건의 - ‘16～’17년 : 이전협의 및 후보지 선정 - ’18 : 이전작업 착수 (캠프워커 반환) - ‘14년 : 부지 매입 - ‘15년 : 시설물 이전 협의 - ‘16～’17년 : 반환부지내 시설물 이전공사 -’18년 : 부지인수 및 도로·공원 조성	【 공약통합 및 공약명 변경】 ○ 영남권 신공항 유치(5-4-4)와 K-2 및 군사시설 이전 및 개발계획 수립(4-3-2) 공약 통합 - 정부의 “영남권 신공항 사전 타당성 연구용역” 결과를 토대로 김해공항 확장안 발표(’16.6.21) - 영남권 신공항 백지화, 대구공항 존치로 결정 ○ 정부가 영남권 신공항 백지화에 따른 후속조치로 대구공항 통합이전 결정 (VIP지시 ’16.7.11) - 공약명 변경 :「K-2 및 군사시설 이전 후적지 개발계획 수립」➩「대구공항 통합이전」및 「캠프워커 부지 반환 및 후적지 개발」 【추진일정 변경】 ○ 반환 예정인 캠프워커 부지내 시설물 이전공사가 지연되어 부지반환 및 후적지개발 추진일정 조정		승인

공 약 명 (주관부서)	조정 사항		조정 사유	조정 결과
	당 초	변 경
⑰ 영남권 신공항 유치 (공항정책과)	○ 정책개요 - 사업기간 : 2015-2025 - 사 업 비 : 비예산(국가직접) - 사업내용 : 장래 영남권 항공 수요를 충족시킬수 있는 제2 관문공항 건설 ○ 연차별 추진계획 - ’14년 : 사전타당성 조사 용역 - ’15년 : 입지타당성 조사 시작 - ’16년 : 기본계획 및 예타 조사 - ’17년 : 예타 조사 완료 - ’18년 : 기본 및 실시설계	○ 공약 통합 ※ 영남권 신공항 유치(5-4-4)와 K-2 및 군사시설 이전 후적지 개발계획 수립(4-3-2)을 통합하여 추진	○ 정부가 「영남권신공항 사전 타당성 연구용역」결과로 김해공항 확장안 발표(’16.6.21) - 영남권 신공항 백지화, 대구공항 존치로 결정 - 대구시, K-2 군공항 이전 및 대구 공항 존치에 대한 정부대책 요구 ○ 대통령, K-2 군공항 및 대구공항 통합이전 발표(’16.7.11) - 정부가 영남권신공항 백지화에 따른 후속조치로 대구공항 통합이전을 발표함에 따라, - 기존에 추진중이던 ‘영남권 신공항 유치(5-4-4)’ 공약과 기존의 ‘K-2 및 군사시설 이전 후적지 개발계획 수립 (4-3-2)’과 통합하여 추진	승인
⑱ 균형발전을 위한 부도심 개발 (도시계획과)	○공약명 : 균형발전을 위한 부도심 개발 ○정책개요 - 사 업 비 : 20억원 - 사업내용 : 부도심 활성화계획 수립 용역 시행 ○연차별 추진계획 - ’16. 11 : 도시기본계획 수립 완료 - ’17. 1 ～ ’18. 5 : 부도심 활성화 계획 수립	○공약명 : 균형발전을 위한 성장유도거점 활성화계획 수립 ○정책개요 - 사 업 비 : 15억원 - 사업내용 : 성장유도거점 활성화 계획 수립 용역 시행 ○연차별 추진계획 - ’17. 5 : 도시기본계획 수립 완료 - ’17. 5 ～ ’18. 7 : 성장유도거점 활성화 계획 수립	○ 부도심은 공간구조상 생활권의 중심지 기능을 담당하는 지역으로서 「2030대구도시기본계획」수립용역 과정 에서 9개 생활권 중심지 중 육성이 필요한 부도심은 성장유도거점으로 명칭을 변경함에 따라 공약명 변경 ○ K2 및 대구공항 이전지 입지결정에 따른 제반 여건을 도시기본계획에 반영하기 위하여 현재 진행중인 「2030대구도시기본계획」수립용역을 중지(’16. 8. 18) 함에 따라, 본 용역 결과를 반영하여 추진해야 하는 「성장유도거점 활성화 계획」수립 용역도 추진 일정을 변경 ○ 사업비는 대상지역을 당초 부도심 (9개소)에서 중심지 육성이 필요한 성장유도거점(5개소)으로 변경함에 따라 사업비 감액	승인

공 약 명 (주관부서)	조정 사항		조정 사유	조정 결과
	당 초	변 경
⑲ 범안로 통행료 무료화 (도로과)	○ 연차별 추진계획 - ’14년 : 정책과제 선정 - ’15년 : 정책과제 용역완료 - ’16년 : 정책방향 결정	○ 연차별 추진계획 - ’14년 : 정책과제 선정 - ’15년 : 정책과제 용역 완료 - ’16년 : 정책방향 결정 자료 작성 - ’17년 : 정책방향 결정	○ 범안로 통행료 무료화 관련 정책 방향 결정을 위한 시나리오 작성 및 다양한 분석 필요 - 다양한 시나리오 작성 (전면 무료화 등)	승인
⑳ 이시아폴리스 간선도로 건설 (원스톱기업지원과)	○ 공약명 : 이시아폴리스 간선도로 건설 ○ 연차별 추진계획 - ’15년 : 예비타당성 완료 - ’16년 : 산단진입도로 지정 - ’17년 : 실시설계 및 보상	○ 공약명 : 종합유통단지∼봉무IC간 간선도로 건설 ○ 연차별 추진계획 - ’15년 : 예비타당성 완료 - ’16년 : 산단진입도로 예타신청 - ’17년 : 산단진입도로 예타완료 - ’18년 : 실시설계 및 보상	○ 공약명 변경 - 이시아폴리스 간선도로 건설 ⇒ 종합유통단지∼봉무IC간 간선도로 건설 ○ 사업추진 일정 변경 - 대도시권교통혼잡도로 ⇒ 산단진입도로 사업계획 변경에 따른 일정 조정	승인
㉑ 대구·경북 창조경제 공동사업 확대 가. 글로벌 창조포럼 공동 개최 (첨단산업과)	○ 공약명 : 글로벌 창조포럼 공동 개최 ○ 내용변경 : ‘대구경북창조경제 공동사업 확대’ 가. 글로벌 창조포럼 공동 개최 (5-4-1-가)	○ 공약명 : 창조도시포럼 운영 으로 변경 ○ 내용변경 : 공약 5-4-1의 하부 공약에서 삭제하고,‘대한민국 창조경제특별시 추진‘(1-1-1)의 세부사업에 추가	○ ‘글로벌 창조포럼 공동 개최’는 향후 경북과 공동개최 계획이 없으며 공동개최에 따른 사업 실익이 크지 않아, ‘대구경북 창조경제공동사업 확대’의 하부 공약에서 제외 필요 ○ 글로벌 창조포럼 공동개최→ 창조도시 포럼 운영으로 변경 ‘대한민국 창조경제특별시 추진’ 공약의 세부사업으로 이관․통합하는 것이 바람직함	미승인

공 약 명 (주관부서)	조정 사항		조정 사유	조정 결과
	당 초	변 경
㉒ 남부권 초광역경제권 발전계획 수립 (미래전략담당관)	○ 공약명 : 남부권 초광역 경제권 발전계획 수립 ○ 사업비 1.25억원 ※용역비 : 10억원(8개시·도 공동출자) ○ 연차별 추진계획 - ’15년 : 시도협약 - ’16년 : 공동연구 - ’17년 : 추진계획수립 국가산업반영	○공약명 : 남부권 초광역경제권 구축 ○ 사업내용 : 대구시 주관 및 7개 시·도 협의 공통과제 발굴 및 국가산업 반영 ○연차별 추진계획 - ’16년 : 시도지사 협력체계 구축 - ’17년 : 연계·협력사업 발굴 - ’18년 : 국가사업 반영	○ 당초 ‘14년 민선6기 공약사업명 (남부권 초광역 경제권 구축)으로 변경 ※「남부권 초광역경제권 발전계획 수립」은 공약 실현을 위한 수행방법임 ○ 영남권 신공항 건설이 김해공항 확장 및 대구공항통합이전으로 변경 추진,대구공항 이전 관련 사업을 포함한 남부권 연계· 협력사업 발굴을 위하여 추진계획 일부 변경 필요 ○ 남부권 경제권 구축을 위한 국가사업의 추진방법 및 예산 등 시·도간 사업범위가 동일하지 않아 공동으로 10억원(8개 시·도 1.25억원)을 출자하여 연구용역을 추진하기는 어려움 - 제12회 영호남 시도지사 협력회의 (‘16.1.29) 시 대구시에서 제출·가결된 「남부권 초광역경제권 구축」추진방안에 대한 각 시·도 의견에서도 기존 영호남 시도지사 협력회의를 내실있게 추진 하여 경제협력방안을 발굴 및 협력하는 것이 바람직하다는 의견임 ⇒ 대구시 주관으로 7개 시·도의 협의를 통해 남부권 공통 협력 사업을 발굴하여 8개 시도가 공동으로 발의하여 국가사업에 반영하는 것이 실현성 있음	승인